Title: Etapy riešenia projektu
Author: geofpela
Last saved by: peter.magdolen
Company: SAS, Bratislava, SK

Príloha č. 2

Náklady na riešenie projektu  Lokálna seizmická sieť východné Slovensko
(v tis. Sk)

Č.ú.

Názov

2004
skutočné

2005
podľa 
uznesenia 466/2004

2005
skutočné

2006
podľa 
uznesenia 466/2004

1. | Výberového konania na seizmometre, zberný systém a analyzačný systém | | | |
2. | Výberové konanie na stavebnú časť seizmických staníc | | 10 | 9.7 |
3. | Výber lokalít nových staníc | | 45 | 55.1 |
4. | Dodávka a skúška 1. časti prístrojov | 1861.7 | | |
5. | Vybudovanie spracovateľského centra v Bratislave | 447.7 | 200 | 217.1 |
6. | Výstavba 1. seizmickej stanice | | 550 | 550 | 250
7. | Výstavba 2. seizmickej stanice | | 550 | 550 | 250
8. | Výstavba 3. seizmickej stanice | | 550 | 550 | 250
9. | Dodávka a skúška 2. časti prístrojov | | 2 050 | 2046.3 |
10. | Výstavba 4. seizmickej stanice | | 350 | 350 | 450
11. | Výstavba 5. seizmickej stanice | | 350 | 350 | 450
12. | Výstavba 6. seizmickej stanice | | 350 | 326.3 | 450
13. | Sieťové prepojenie, skúšky a uvedenie celej siete do prevádzky | | | | 550
| Osobný automobil | 635.6 | | |
| Mzdové prostriedky | 300 | 700 | 700 | 700
| Spolu | 3245 | 5 705 | 5704.5 | 3 350

Prevádzkové náklady od r. 2007:									v tis. SK
Bežné výdavky - náklady na prenos údajov, údržbu a prevádzku lokálnej siete			1 000
Mzdové prostriedky a odvody									   600
Spolu													1 600