Vyhodnotenie plnenia Programu starostlivosti o Pieninský národný park za obdobie 1998-2008                                                

Úlohy nesplnené, resp. doteraz nerealizované

Číslo úlohy | Názov úlohy | Termín plnenia | Zodpo-vedný | Predpo-kladané  náklady v tis.Sk | Skutočné náklady v tis.Sk | Odôvodnenie | Návrh nového (resp. pôvodného) termínu plnenia
1. Starostlivosť o ovzdušie

5.1.2.

Monitorovať a vyhodnocovať klimatické zmeny v NPR Prielom Dunajca vplyvom sústavy vodných diel.

1999
a
stály

MŽP SR

500

0

Úloha predpokladá vybudovanie hydrometeorologickej stanice v prielome Dunajca. Projekt bol vypracovaný (zabezpečiť má SHMÚ).

2008

3. Starostlivosť o vodstvo, vodné a mokraďné ekosystémy

5.3.3.

Poskytovať obciam v NP i v OP, ktoré ešte nemajú vybudovanú kanalizáciu a ČOV prednostne finančný príspevok z príslušných fondov na ich realizáciu, najmä obce na území parku a okolo toku Rieka.

2008

MŽP SR
MP SR

+
+

0
nešpecif.

Zatiaľ nebola pripravená projektová dokumentácia v obciach, termín plnenia ostáva aktuálny.

2008

4. Starostlivosť o lesy

5.4.4.

V lesných ekosystémoch NPR zohľadňovať funkciu krovitých spoločenstiev ako určitého vývojového štádia.

pri obnove LHP a stály

MŽP SR

0

0

Úlohu možno plniť až v rámci najbližšej obnovy LHP.

2004
2006

5. Starostlivosť o rastlinstvo
5.5.5. | Spracovať návrh na záchranu fragmentov horských lúk v lokalite Magurky. | 2002 | MŽP SR | 100 | 0 | Pri plnení naliehavejšej úlohy (systém NATURA 2000) a pri súčasných personálynch kapacitách sa vyžaduje neskorší termín. | 2008
7. Starostlivosť o prostredie a krajinu

5.7.3.

Určiť únosnosť turistických chodníkov v najviac atakovaných častiach NP. Vypracovať a následne realizovať program regulácie návštevnosti PIENAP podľa jednotlivých EFP.

2004

MŽP SR
MP SR

0

0

Z prostriedkov British Know How Fund sa vypracoval Základný plán udržateľného cestovného ruchu pre PIENAP. Výstup z projektu však neobsahuje stanovenie limitov. Pre ujasnenie metodiky a následné stanovenie limitov sa požaduje posun termínu.

2008

8. Informačný systém a monitoring
5.8.2. | Zabezpečiť vypracovanie informačného systému prírodného prostredia (GIS) a vytvoriť databázu jednotlivých zložiek prírodného prostredia na území NP. | 2001 | MŽP SR | 2500 | 100 | Informačný systém sa začína spracovávať od roku 2000 ako súčasť centrálnych databáz ŠOP SR. | 2006

5.8.3.

Postupne vytvoriť trvalú monitorovaciu sieť 200x200 m v NPR a lesných ekosystémoch NP.

NPR 2004,
ostatné územie
2008

MŽP SR

4100

0

V dôsledku naliehavejších úloh sa s plnením nezačalo. Monitorovacia sieť má napomáhať pri koordinácii výskumov v lesných ekosystémoch NP.

2008

5.8.4. | Vybudovať monitorovaciu bioklimatickú stanicu na lokalite Huta. | 2000 | MŽP SR | 300 | 0 | Úloha sa zabezpečí v ďalšom období (v kompetencii SHMÚ). | 2008
5.8.5. | V spolupráci so SHMÚ dobudovať existujúcu limnografickú stanicu v Prielome Dunajca o zariadenia sledujúce prietok a teplotný režim Dunajca. | 2000 | MŽP SR | 250 | 0 | Limnografická stanica zatiaľ nemeria všetky údaje, ktoré by boli vhodné pre posudzovanie vplyvu vodných nádrží. Úloha sa zabezpečí v ďalšom období (v kompetencii SHMÚ). | 2008
10. Environmentálna výchova a propagačná činnosť

5.10.3.

V rámci ekologicko-výchovnej lokality vybudovať informačný viacúčelový objekt S-PIENAP a v druhej etape dobudovať informačnú a ekologickú lokalitu.

I. etapa 2003,
II. etapa 2006

MŽP SR

7650

0

S rekonštrukciou objektu  zakúpeného v r. 1992 (štátne vlastníctvo) sa nemohlo začať pre neuskutočnenú delimitáciu od ŠL.

2006
I. a II. etapa

5.10.4. | Spracovať audiovizuálne a multimediálne programy o prírode PIENAP. | 2002 | MŽP SR | 550 | 0 | S-PIENAP požiadala o financovanie v rámci projektov, ktoré neboli úspešné, v dôsledku nedostatku financií sa úloha nezabezpečila. Úlohu zabezpečí S-PIENAP v novonavrhovanom termíne dodávateľsky za predpokladu dostatku potrebných finančných prostriedkov. | 2005
5.10.6. | Vyriešiť program environmentálnej výchovy návštevníkov na nástupoch menej navštevovaných turistických chodníkov. | 2006 | MŽP SR | 700 | 0 | Úloha trvá, predpokladá nevyhnutné finančné prostriedky. | 2006
11. Dobudovanie S-PIENAP

5.11.1.

Personálne dobudovať S-PIENAP podľa navrhnutej organizačnej štruktúry, ktorá tvorí prílohu č. 1 a zvýšiť tak výkon odbornej starostlivosti a prípadného odborného zázemia pri výkone štátnej správy na území NP.

priebežne

MŽP SR

18 200

0

Personálne dobudovanie S-PIENAP je naďalej aktuálne, pretože súčasný počet pracovníkov (5) je nepostačujúci (plánovaný počet je 18).

2003
a priebežne

5.11.3. | Vybudovať, resp. zakúpiť administratívno-prevádzkovú budovu S-PIENAP. | 2002 | MŽP SR | 7 650 | 0 | Úloha je aktuálna, doteraz nerealizovaná pre neuskutočnenú delimitáciu od ŠL TANAP. Prebiehajú rokovania na získanie budovy ešte v tomto roku. | 2006
5.11.4. | Riešiť personálne otázky prostredníctvom získania služobných bytov v území PIENAP a jeho OP. | 2004 | MŽP SR | 20 000 | 0 | Úloha sa zatiaľ nerealizovala pre nedostatok finančných prostriedkov. | 2008
Spolu 15 nesplnených, resp. doteraz nerealizovaných úloh | 62 500 | 100 | |