Author: Peter
Last saved by: Ľubomír Šatara
Company: urad

Návrh

Komuniké

     Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa .................... prerokovala a schválila Návrh na schválenie zvýšenia obstarávacej ceny stavby ”Prístavba Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave”, predloženého z titulu zmien a navyše prác. Schválená konečná obstarávacia cena stavby predstavuje 213,0 mil. Sk, zvýšenie z titulu zmien a navyše prác tvorí čiastku 38,1 mil. Sk.