Title: FM ISPA, 30 Júna, 2003
Author: dittelova
Last saved by: spano
Company: UVSR

Príloha č. 4

FM ISPA,  30. jún 2003
Sektorový splnomocnenec pre program: | Ing. Erna Dohnáliková | | | | | |
Implementačná agentúra: | Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov | |
Organizácia: | Ministerstvo životného prostredia SR | |

Por. číslo

Názov projektu

Celkové náklady

ISPA grant (€)

Pomer kofinanc. ISPA (%)

Kontrah. (€)

Kontrah. 
v  %

Výdavky 
k 30.6.2003

Predpokladané  výdavky – 12/2003

Poznámka (aktuálny stav)

1 | Pravobrežná čistiareň odpad. vôd v Trenčíne                    (2000 SK 16 P PE 001) | 7 936 732 | 3 968 366 | 50,00% | 6 216 351 | 78,32% | 0 | 2 135 663 | Zmluva o dielo (práce) a Zmluva o poskytnutí služieb (stavebný dozor) bola podpísaná v 4/2003. Práce prebiehajú.
2 | Rozšírenie čistiarne odpad. vôd mestskej aglomerácie v Nitre                                         (2000 SK 16 P PE 002) | 10 354 200 | 5 177 100 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | Prvá verzia tendrovej dokumentácie (TD) bola predložená Delegácii EK 11.6.2003. Predpokladaný začiatok tendra na služby (stavebný dozor) je 7/2003, na práce 9/2003.
4 | Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica                              (2000 SK 16 P PE 003) | 45 468 667 | 22 734 334 | 50,00% | 195 934 | 0,43% | 156 747 | 2 246 436 | Tender na práce bol spustený 11.6.2003. Tender na služby (stavebný dozor) - 1. fáza bol ukončený. V súčasnosti prebieha príprava podpisu Zmluvy. Užší zoznam tendra na služby (Projektová a tendrová dokumentácia pre II. fázu) bol vyhodnotený 9.6.2003.
5 | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Komárno                                           (2000 SK 16 P PE 004) | 8 043 700 | 4 021 850 | 50,00% | 108 644 | 1,35% | 86 915 | 623 829 | Tender na služby (stavebný dozor) bol vyhodnotený 9.6.2003. Tender na práce - ČOV bol spustený 17.4.2003. TD na práce - kanalizácia je pripravovaná konenčným prijímateľom, predpokladaný termín spustenia tendra je 9/2003
6 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene                                               (2001 SK 16 P PE 005) | 10 967 050 | 5 483 525 | 50,00% | 116 884 | 1,07% | 93 507 | 116 884 | Od 12.6. konečný prijímateľ do TD zapracováva pripomienky Delegácie EK. Spustenie tendra na práce sa predpokladá na október 2003. Tender na služby (stavebný dozor) - užší zoznam bol vyhodnotený 6.6.2003
7 | Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov                              (2000 SK 16 P PA 001) | 1 271 760 | 953 820 | 75,00% | 1 238 239 | 97,36% | 1 206 179 | 1 224 788 | Kontrakty ukončené.
8 | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec  (2001 SK 16 P PE 007) | 12 295 676 | 6 024 881 | 49,00% | 0 | 0,00% | 0 | 60 000 | Tender na služby (stavebný dozor) bude spustený 1.7.2003, TD na služby je posudzovaná IA po zapracovaní pripomienok Delegácie EK. Prvá verzia TD na práce bola predložená Delegácii EK 13.6.2003, spustenie tendra sa predpokladá na 9/2003.
9 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplina                    (2002 SK 16 P PE 008) | 23 610 000 | 16 527 000 | 70,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | Prvá verzia TD je posudzovaná na IA. Spustenie tendra na služby sa predpokladá v 7/2003, na práce v 8/2003.
10 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova                                    (2002 SK 16 P PE 009) | 10 520 000 | 5 260 000 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | Prvá verzia TD je pripravovaná konečným prijímateľom. Spustenie tendra na služby (stavebný dozor) sa predpokladá v 11/2002, na práce v 12/2003.
11 | Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici                                         (2002 SK 16 P PE 010) | 12 300 000 | 6 150 000 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | Prvá verzia TD je pripravovaná konečným prijímateľom. Spustenie tendra na služby (stavebný dozor) sa predpokladá v 11/2002, na práce v 12/2003.
12 | Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie                                         (2002 SK 16 P PE 011) | 19 608 000 | 9 804 000 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | Prvá verzia TD je pripravovaná konečným prijímateľom. Spustenie tendra na služby (stavebný dozor) sa predpokladá v 11/2002, na práce v 12/2003.
13 | Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou                          (2002 SK 16 P PE 012) | 28 000 000 | 19 600 000 | 70,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | TD na služby (projektová dokumentácia a TD na práce a služby - stavebný dozor) bola schválená  Delegáciou EK 26.6.2003. Tender bude spustený 4.7.2003
| Total | 190 375 785 | 105 704 876 | | 7 876 052 | | 1 543 348 | 6 407 600 |

FM ISPA, 30. jún 2003
Sektorový splnomocnenec: Ing. Jozef Bošanský | | | | |
Implementačná agentúra: Implementačná agentúra ŽSR | | | | |
Inštitúcia: MDPT SR | | | | | | |
No | Názov projektu | Celkové oprávnené náklady   (€) | ISPA grant (€) | Miera  ISPA (%) | Kontrhovné (€) | Kontrahované v % | Výdavky (€) | Poznámky (Stav kontraktácie)
1 | Modernization of the Rail Track Bratislava - Trnava /section Bratislava Rača -   -Šenkvice/ | 51 422 000 | 38 566 500 | 75% | 41 992 905.42 | 81,7% | 13 146 573.78 | Výber na nezávislého konzultanta pre dozora bol vyhodnotený a správa s doporučením z vyhodnotenia bola zaslaná na ECD a po jej schválení bude vyhlásený víťaz.
2 | Moderdnization of the Rail Track Šenkvice - Cífer and station Rača - Trnava located in Slovakia | 116 859 000  (Predpokladané zvýšené náklady: 150 000 000 ) | 58 429 500 | 50% | 0 | 0% | 0 | Prvá súťaž na výber zhotoviteľa na práce zrušená. Tendrová dokumentácia je v procese prehodnotenia nezávislými expertmi EÚ. Vzhľadom na predpoklad zvýšenia nákladov stavby ŽSR zabezpečí prostriedky na navýšené náklady. Tendrová dokumentácia bude prepracovaná v zmysle pripomienok nezávislých expertov EÚ. Následne bude vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľa na práce a na konzultanta pre dozora.
3 | Modernization of the Rail Track Trnava - Nové Mesto nad Váhom / Section Trnava - Piešťany located in Slovakia / | 93 488 000 | 46 744 000 | 50% | 0 | 0% | 0 | V súčasnosti je tendrová dokumentácia predložená na schválenie ECD, po ktorom bude vyhlásený tender na práce a následne na konzultanta pre dozora.
| Total | 261 769 000 EUR | 143 740 000 EUR | | 41 992 905.42 EUR | | 12 348 975.08  EUR |

FM ISPA,  30. jún 2003
Sektorový splnomocnenec: Ing. Peter Barek | | | | | |
Implementačná agentúra: Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest | | |
Inštitúcia: Slovenská správa ciest | | | | | |
č | Názov projektu | Celkové oprávnené náklady (€) | ISPA grant (€) | Miera  ISPA (%) | Kontrahované | Kontrahované v % | Výdavky (€) | Poznámky (Aktuálny stav)
1. | Výstavba diaľnice D61, úsek Viedenská cesta - Prístavný most, Bratislava | 52 210 000 | 27.149.200 | 52 | 53.519.934,45 | 102 | 4. 623.766,82 |
| Celkom | 52 210 000 | 27.149.200 | 52 | 53.519.934,45 | 102 | 4.623.766,82 |