Author: Dragica Jablonská
Last saved by: Katarína Ftáčniková
Company: MZ SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z ..... decembra 2006

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. 11. 2005 

Číslo materiálu: | 29605/2006
Predkladateľ: | minister zdravotníctva

Vláda
A.	mení
A.1.	bod A.1 uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. 11. 2005 takto:

„A.1. 	návrh na pokračovanie obstarávania stavby „Výstavba Detského
kardiocentra SR v Bratislave“ podľa prepracovaného stavebného zámeru s novým názvom „Dobudovanie Detského kardiocentra SR“.

A.2.	bod B.1 uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. 11. 2005  takto:
„B.1.	zabezpečiť financovanie stavby „Dobudovanie Detského kardiocentra SR“ z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR (projekt SECAL) poskytnutých v roku 2005 v sume 396,381 mil. Sk a z vlastných finančných zdrojov organizácie;“

Termín: do konca výstavby

A.3.	bod B.2 uznesenia vlády SR č. 912 zo 16. 11. 2005  takto:
„B.2.	zabezpečiť prepracovanie stavebného zámeru

Termín: do 31. 3. 2007

 „B.3.	v zmysle prepracovaného stavebného zámeru zabezpečiť aktualizáciu údajov v Registri investícií Ministerstva financií SR;“

Termín: do 14 dní po schválení stavebného zámeru
Vykoná:		minister zdravotníctva

Na vedomie:		ministri
			predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
			príslušní správcovia ďalších rozpočtových kapitol