Title: Príloha č
Author: latta
Last saved by: sulik
Company: mvrr

Príloha č. 1

Prehľad o stave prípravy a realizácie verejných prác –
tabuľková časť
Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Kancelária NR SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 6 18 | Rekonštrukcia budovy NR, Župné námestie 12 | DV | | | 0204 | | | | 0404 | 0704 | 0804 | 0904 | |
| | FO | | | 0,5 | | | | 0,9 | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Národný bezpečnostný úrad
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
14 1 18 | Rekonštrukcia budova NBÚ, Bratislava - Petržalka | DV | | | 0603 | | 1203 | | 0204 | | 1203 | | |
| | FO | | | 0,4 | | 1,2 | | 2,1 | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Košický samosprávny kraj
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
74 2 19 | Priemyselný park Michalovce | DV | 0202 | | 1103 | | 0302 | 1203 | | 0504 | 1004 | | |
| | FO | 0,04 | | 0,02 | | | | | | | | |
74 9 22 | Výstavba rehabilitačno – rekreačného centra Borša | DV | 1103 | 1103 | 1202 | | | | 0904 | 1004 | 1204 | 0105 | |
| | FO | 0.1 | | 0,8 | | | | | | | | |
74 14 19 | Priemyselný park Nový Domov Spišská Nová Ves | DV | | | | | 0402 | 0802 | 0502 | 1002 | 0903 | 0404 | |
| | FO | | | | | 0,6 | | 1,1 | | | | |
74 15 15 | Rekonštrukcia kaštiela Borša | DV | 0203 | 0603 | 0402 | | | | 1102 | 0303 | 0304 | 0404 | |
| | FO | | | | | | | | | | | |

74
877
19

Polyfunkčný objekt Luník IX. –centrum vzdelávacích činností

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
74 930 8 | Kanalizácia obce, I. etapa, Valaliky | DV | | | | | | | 0604 | 0904 | | | |
| | FO | | | | | | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií NR SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
29 58 5 | Diaľničný privádzač Poprad – Kežmarok, I. etapa Matejovce | DV | | | | | 0596 | 0398 | 0204 | | | | |
| | FO | | | | | 2,9 | | 1,1 | | | | |
29 61 19 | Cesta I/Donovaly - Jelenec | DV | | | 0699 | | 0799 | | 0301 | 1202 | | | |
| | FO | | | | | 0,9 | | | 4,7 | | | |
29 65 6 | Modernizácia telekomunikačnej siete ŽSR, 2. 3. etapa | DV | | | | | | | 0903 | 1103 | | | |
| | FO | | | | | | | 9,5 | | | | |
29 97 5 | D 1 Jablonov – Behárovce, úsek Studenec - Behárovce | DV | | | 0801 | 0104 | 0801 | 0104 | | | | | |
| | FO | | | 0,5 | | 10,6 | | | | | | |
29 118 6 | Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou | DV | | 0904 | | 1003 | 0104 | 0304 | 0904 | 0904 | 0905 | 0605 | |
| | FO | | | | | 45,0 | | 60,0 | | | | |
29 121 19 | Cesta II/525 Hronská Breznica  - Budča | DV | | | | | | 0105 | 1004 | | | | |
| | FO | | | | | | | 2,5 | | | | |

29
123
19

Pošta 23 Košice

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
29 146 5 | D 1 Mengušocve - Jánovce | DV | | | 0502 | 1103 | 0198 | 0199 | 0403 | | | | |
| | FO | | | 0,5 | | 10,4 | | 13,5 | | | | |
29 151 19 | Cesta I/51 Trnava, Nitrianska ulica | DV | | | | | 1089 | 0303 | 1200 | | | | |
| | FO | | | | | 0,1 | | 2,2 | | | | |

29
155
19

Hlavné spracovateľské centrum – Pošta Zvolen 2

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
29 159 5 | D1 Sverepec – Považská Bystrica | DV | | | 0403 | 0903 | 0403 | | | | | | |
| | FO | | | 9,2 | | 0,1 | | | | | | |
29 161 6 | Trnava Nové Mesto n/Váhom, modernizácia trate, II. časť | DV | | 0304 | | 0300 | 0400 | 0600 | 0703 | 0904 | 1004 | 1104 | |
| | FO | | | | | | | | | | | |
29 164 6 | Železničný koridor Prešov - peronizácia | DV | | 0605 | | 1004 | 0804 | 1104 | 0305 | 0505 | 0206 | 0406 | |
| | FO | | | | | 20,0 | | 45,0 | | | | |

29
165
6

Modernizácia IX- koridoru Prešov - Plaveč

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
29 175 5 | R 2 Ožďany , obchvat | DV | | | 1198 | 0500 | 1198 | 1100 | 0802 | | | | |
| | FO | | | | | 6,0 | 10,7 | | | | | |
29 180 19 | Cesta I/68 Lipany | DV | | | 0900 | | 0598 | 0403 | 0504 | | | | |
| | FO | | | | | | | | | | | |
29 181 19 | Cesta II/584 Liptovské Matiašovce | DV | | | 0302 | | 0302 | 1102 | 0903 | | | | |
| | FO | | | 0,3 | | 0,4 | | 1.,5 | | | | |

29
191
6

Úprava koľajišťa vrátane nástupíšť Prešov

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |

29
193
6

Dišperizácia trate Podunajské Biskupice - Komárno

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
29 194 6 | Elektrifikácia trare Zvolen – Lučenec- Fiľkovo | DV | | 0304 | | 0605 | 0905 | 0905 | 0906 | 0906 | 1206 | 1206 | |
| | FO | | | | | 20,0 | | 30,0 | | | | |

29
196
6

Dišperizácia trate – Žilina - Rajec

DV

| | FO | | | | | | | | | | | |
29 197 6 | Dostavba stanice Poprad | DV | | 0605 | | 1004 | 1104 | 1204 | 0405 | 0505 | 0206 | 0306 | |
| | FO | | | | | 15,0 | | 20,0 | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý
Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Ministerstvo hospodárstva SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk 
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
26 6 18 | Rekonštrukcia objektu MH Mierova 17 19 | DV | | | 0904 | | | | 0305 | 0505 | 0905 | 1005 | 158,0 |
| | FO | | | 2,5 | | | | 11,0 | | | 144,5 | |
26 7 18 | Nadstavba budovy na Bajkalskej 27 v správe SEA | DV | 0304 | | 1201 | | 0304 | | | | | | |
| | FO | 0,6 | | 0,2 | | 0,6 | | 1,7 | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Ministerstvo spravodlivosti SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk 
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
13 23 11 | Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Bratislava III | DV | | | | | 0802 | 0603 | 1102 | 0903 | 0604 | | |
| | FO | | | | | 0,05 | | 0,66 | 0,07 | | | |
13 179 11 | Rekonštrukcia budovy Krajského súdu Banská Bystrica | DV | | | | | 1102 | | 0505 | | | | |
| | FO | | | | | 0, 07 | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Ministerstvo školstva SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
20 169 10 | Centrum knižničných služieb a vededkotechnických  informácií | DV | | | | | 0304 | | 0704 | | | 1104 | |
| | FO | | | | | | | | | | 10,0 | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Ministerstvo životného prostredia SR
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004

V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
27 562 7 | Zásobovanie pitnou vodou Juhovýchodu Zemplína | DV | | 0102 | 0699 | 0302 | 0401 | 0401 | | | 0504 | 0704 | |
| | FO | | 4,0 | | | 3,4 | | | | | | |
27 596 8 | Odkanalizovanie Juhovýchodu Zemplína | DV | | 0102 | 0699 | 0302 | 0401 | 0401 | | | 0504 | 0704 | |
| | FO | | 4,0 | | | 3,4 | | | | | | |
27 423 8 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | DV | | 0402 | | | 0403 | 1003 | 0903 | 0204 | | | |
| | FO | | 0,4 | | | 1,7 | | 3,8 | | | | |
27 417 8 | Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie kanalizácie v Pov. Bystrici | DV | | 0402 | | | 1202 | 0603 | 0703 | 1103 | | | |
| | FO | | 1,7 | | | 4,2 | | 3,2 | | | | |
27 357 8 | Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie | DV | | 0402 | 0402 | 0503 | 0603 | 0803 | 0803 | | | | |
| | FO | | 0,7 | 0,2 | | 4,0 | | 5,0 | | | | |
27 304 7 | Prívod vody DN 600 Bratislava – Malacky, II. stavba | DV | | | | | | | 0801 | 0502 | 0502 | | |
| | FO | | | | | | | 0,3 | | 0,6 | | |
27 544 8 | Kanalizačný zberač  C, III.stavba Vajnorská – Rožňavská ulica | DV | | | | | | | 0303 | 0303 | 0603 | 0603 | |
| | FO | | | | | | | 0,3 | | 0,8 | | |
27 594 8 | ČOV Poprad -Matejovce | DV | | 0503 | | 0590 | 0989 | 0689 | 0990 | 1190 | | 0990 | |
| | FO | | | | 577,7 | 3,0 | | | | | 499,9 | |
27 582 8 | Čistiareň a kanalizácia v trnavskom regióne | DV | | 0503 | | | | 0104 | | 0104 | | | |
| | FO | | | | | | | | | | | |
27 110 8 | Zvolen – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV | DV | | 0302 | | | 1297 | 0599 | 0798 | 0500 | 1103 | 0204 | |
| | FO | | | | | | 0,02 | 1,1 | 0,04 | 0,4 | 0,02 | |
27 515 7 | Vodné dielo Slatinka na Slatine | DV | | | | 1197 | | 0604 | | 0305 | | | |
| | FO | | | | | | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Nitriansky samosprávny kraj
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

76
1
19

II/509 Gbelce, Závada

DV

0100

| | FO | | | | | | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Žilinský samosprávny kraj
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
80 30 15 | Obnova Národného domu Divadlo SNP, II. etapa, Martin | DV | | 0404 | | | | | 0601 | 0302 | 0704 | 0707 | |
| | FO | | | | | | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý

Stav pripravenosti verejnej práce                                                                                                                                                           

Predkladateľ : Prešovský samosprávny kraj
Verejná práca navrhnutá na začatie v roku : 2004
V mil. Sk (na jedno desatinné miesto)
Číslo verejnej práce podľa RPPVP | Názov verejnej práce | Umiestnenie VP | Spracovanie žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov | Stavebný zámer pri VP nad 40 mil. Sk | Štátna expertíza pri VP nad 200 mil. Sk | Dokumentácia pre ÚR | Vydanie ÚR | Dokumentácia pre SP | Vydanie SP | Ukončenie výberového konania | Uzatvorenie zmluvy o dielo s termínom začatia realizácie | Finančný objem podľa RPPVP | Finančný objem podľa štátneho rozpočtu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
77 10 19 | Priemyselný park Poprad Matejovce | DV | | | | | | | | | | 1004 | |
| | FO | | | | | | | | | | | |

Legenda :
DV = Dátum spracovania/vydania/získania príslušného dokumentu
FO = Príslušný finančný objem, ktorý bol použitý