Príloha č. 1
Prípravné práce Fáza 1 a Prípravné práce Fáza 2 
Časť A : Prípravné práce Fáza 1
Prípravné práce Fáza 1
Koncesionár sa zaväzuje realizovať nasledujúce práce a činnosti ("Prípravné práce Fáza 1"):
1)	Projektantské práce v súvislosti s dokumentáciou na zmeny stavebného povolenia a objektmi na kritickej ceste, ktoré Zmluvné strany ďalej špecifikujú a odsúhlasia do jedného mesiaca od uzavretia Druhého dodatku a ktoré budú rešpektovať celkové rozpočtové obmedzenia stanovené v stĺpci pod názvom "Projektová dokumentácia na zmeny stavebného povolenia a objekty na kritickej ceste" v tabuľke v Prílohe č. 2, Časť A;
2)	Prevzatie častí Staveniska požadovaných za účelom Prípravných prác Fáza 1;
3)	Realizácia geologických prieskumov, ktoré budú podrobnejšie upravené a odsúhlasené Zmluvnými stranami v rámci jedného mesiaca 	od podpisu Druhého dodatku a budú rešpektovať celkové rozpočtové obmedzenia stanovené v stĺpci s názvom „Geotechnický prieskum na Stavenisku“ v tabuľke v Prílohe č. 3, Časť A; 
4)	Realizácia archeologických prieskumov v určených lokalitách na Stavenisku uvedených pre každý Príslušný úsek v tabuľke v Prílohe č. 3, Časť A;
5)	Zriadenie zariadenia Staveniska bude rešpektovať celkové rozpočtové obmedzenia stanovené v stĺpci s názvom „Prevzatie Staveniska/ zriadenie zariadenia na Stavenisku v tabuľke v Prílohe č. 2, Časť A;
6)	Práce na Stavenisku uvedené pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe 3, Časť A, budú pozostávať z: 
(a) ako je uvedené pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť A, realizácie výrubu stromov, odstránenie porastov a koreňov nevyhnutných pre výstavbu Projektovej cestnej komunikácie, nakladania a odvozu vyrúbaných stromov, porastov a koreňov a uloženia na skládkach odsúhlasených Zmluvnými stranami;
(b) výstavby príjazdových ciest na Stavenisko určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť A. Príjazdové cesty budú minimálne zrealizované so spevneným povrchom a v spáde.
(c) odstránenia vrchnej časti (skrývky) pôdy, ktoré spočíva v odstránení ornice, naložení a odvoze výkopu na skládku zeminy v rozsahu a lokalitách určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť A; 
(d) realizácie zemných prác, ktoré zahŕňajú výkopové práce, nakládku a odvoz výkopu a zhotovenie násypov v rozsahu a lokalitách určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť A; 
(e) prekládky určených inžinierskych sietí ako je uvedené v tabuľkách Prílohy 3, Časť A;
(f) prípravy zariadenia Staveniska pozostávajúce z prác v rozsahu uvedenom v tabuľkách Prílohy č.3, Časť A;
(g) dočasného odvodnenia a environmentálnych prác požadovaných v súvislosti s Prípravnými prácami Fáza 1 v súlade s  Druhým dodatkom a Koncesnou zmluvou.
Časť B: Prípravné práce Fáza 2

Koncesionár sa zaväzuje realizovať nasledujúce práce a činnosti ("Prípravné práce Fáza 2"):
1)	Projektantské práce v súvislosti s dokumentáciou na zmeny stavebného povolenia a objektmi na kritickej ceste, ktoré Zmluvné strany ďalej špecifikujú a odsúhlasia do jedného mesiaca od uzavretia tohto Dodatku a ktoré budú rešpektovať celkové rozpočtové obmedzenia stanovené v stĺpci pod názvom "Projektová dokumentácia na zmeny stavebného povolenia a objekty na kritickej ceste" v tabuľke v Prílohe č. 2, Časť B;
2)	Prevzatie častí Staveniska požadovaných za účelom Prípravných prác Fáza 2;
3)	Realizácia geologických prieskumov, ktoré budú podrobnejšie upravené a odsúhlasené Zmluvnými stranami v rámci jedného mesiaca 	od podpisu tohto Dodatku a  budú rešpektovať celkové rozpočtové obmedzenia stanovené v stĺpci s názvom „Geotechnický prieskum na Stavenisku“ v tabuľke v Prílohe č. 3, Časť B; 
4)	Realizácia archeologických prieskumov v určených lokalitách na Stavenisku uvedených pre každý Príslušný úsek v tabuľke v Prílohe 3, Časť B;
5)	Práce na Stavenisku uvedené pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe 3, Časť B, budú pozostávať z: 
(a) ako je uvedené pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B, realizácie výrubu stromov, odstránenie porastov a koreňov nevyhnutných pre výstavbu Projektovej cestnej komunikácie, nakladania a odvozu vyrúbaných stromov, porastov a koreňov a uloženia na skládkach odsúhlasených Zmluvnými stranami;
(b) výstavby príjazdových ciest na Stavenisko určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B. Príjazdové cesty budú minimálne zrealizované so spevneným povrchom a v spáde.
(c) odstránenia vrchnej časti (skrývky) pôdy, ktoré spočíva v odstránení ornice,  naložení a odvoze výkopu na skládku zeminy v rozsahu a lokalitách určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B; 
(d) realizácie zemných prác, ktoré zahŕňajú výkopové práce, nakládku a odvoz výkopu a zhotovenie  násypov v rozsahu a lokalitách určených pre každý Príslušný úsek v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B; 
(e) demolácií a prekládok sietí ako je určené v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B;
(f) prípravy zariadenia Staveniska pozostávajúce z prác v rozsahu uvedenom v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B (vrátane dočasných elektrických prípojok);
(g) zakladania mostov a súvisiacich prác ako sú určené v tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B;
(h) výkopov, striekaných betónov, vrtov, klincov a súvisiacich prác vo vzťahu k tunelovým portálom a múrom ako sú určené tabuľkách v Prílohe č.3, Časť B;
(i) dočasného odvodnenia a environmentálnych prác požadovaných v súvislosti s Prípravnými prácami Fáza v súlade s týmto Dodatkom a Koncesnou zmluvou.

Príloha č. 2
Náklady na Prípravné práce

Časť A
	Náklady na Prípravné práce Fáza 1
Náklady na Prípravné práce Fáza 1 ("Náklady na Prípravné práce Fáza 1") sú uvedené nižšie:
 	15/10/09 - 30/04/10 *	 		
Projektová dokumentácia	 	 		
Projektová dokumentácia na zmeny stavebného povolenia a objekty na kritickej ceste	1 600 000 €	**		
 	 	 		
Práce na Stavenisku	 	 		
Geotechnický prieskum na Stavenisku	600 000 €	***		
Archeologický prieskum na Stavenisku	250 000 €	***		
Prevzatie Staveniska / zriadenie zariadenia na Stavenisku	200 000 €	****		
Práce na úseku č. 1	2 299 000 €	***		
Práce na úseku č. 2	3 448 500 €	***		
Práce na úseku č. 3	2 299 000 €	***		
Práce na úseku č. 4	1 724 250 €	***		
Práce na úseku č. 5	1 724 250 €	***		
Nezávislý dozor	200 000 €	**		
Projektové riadenie zhotoviteľa	245 000 €	**		
Sub-total	12 990 000 €	 		
 	 	 		
Náklady koncesnej spoločnosti	 	 		
Slovenské dial'nice, a.s.	260 000 €	**		
Poistenie stavebných prác	150 000 €	****		
 	 	 		
Celkom spolu bez DPH	15 000 000 €	 		
 	 	 		
Celkom spolu s DPH	17 850 000 €	 		
				
* Za predpokladu zahájenia Prípravných prác Fáza 1 15. októbra 2009				
** Plnenie týchto položiek bude mesačne potvrdzované Nezávislým dozorom v súlade so zásadou časového pomeru (pro rata temporis) pre obdobie medzi 15. októbrom 2009 a 15. februárom 2010				
*** Náklady za tieto položky budú stanovené Nezávislým dozorom  podľa skutočného postupu prác v percentuálnom vyjadrení 		
**** Pozri článok 3.9. Druhého Dodatku				

Časť B
	Náklady na Prípravné práce Fáza 2
Náklady na Prípravné práce Fáza 2 (“Náklady na Prípravné práce Fáza 2”) sú uvedené nižšie:
 	15/02/10 - 30/04/10 *	 	
Projektová dokumentácia	 	 	
Projektová dokumentácia na zmeny stavebného povolenia a objekty na kritickej ceste	3 150 000 €	***	
 	 	 	
Práce na stavbe	 	 	
Geotechnický prieskum na Stavenisku	800 000 €	***	
Archeologický prieskum na Stavenisku	1 052 000 €	***	
Práce na úseku č. 1	2 899 000 €	***	
Práce na úseku č. 2	4 214 000 €	***	
Práce na úseku č. 3	2 611 000 €	***	
Práce na úseku č. 4	1 944 500 €	***	
Práce na úseku č. 5	2 059 500 €	***	
Nezávislý dozor a Kontrolór	300 000 €	**	
Projektové riadenie zhotoviteľa	250 000 €	**	
Spolu	16 130 000 €	 	
 	 	 	
Náklady koncesnej spoločnosti	 	 	
Slovenské dial'nice, a.s.	520 000 €	**	
Poistenie stavebných prác	200 000 €	****	
 	 	 	
Celkom spolu bez DPH	20 000 000 €	 	
 	 	 	
Celkom spolu s DPH	23 800 000 €	 	
				
* Za predpokladu, že Prípravné práce Fáza 2 budú zahájené podľa článku 3.1 tohto Dodatku	
** Plnenie týchto položiek bude mesačne potvrdzované Nezávislým dozorom v súlade so zásadou časového pomeru (pro rata temporis)	
*** Náklady za tieto položky budú stanovené Nezávislým dozorom podľa skutočného postupu prác na stavbe a projektovej dokumentácii v percentuálnom vyjadrení 	
**** Pozri článok 3.9 tohto Dodatku	

Príloha č. 3
Zoznam jednotlivých položiek - Prípravné práce

Časť A
Zoznam jednotlivých položiek - Prípravné práce Fáza 1

D1 - Úsek č. 1: DUBNÁ SKALA - TURANY 	
Prípravné práce Fáza 1

	

	

	

 	

 	

 	
 	
15/10/09  -  30/04/10 *	

Položka	

 	
Jednotka	
Množstvo pre 100%	
Celková cena	

 	

 	

 	
 	
%	
Množstvo	

 	

 	

 	

1	
 	
PRIESKUMY NA STAVENISKU	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
1	
Geotechnický prieskum	
 	
ks	
1	
0 €	
100%	
0 €	

2	
Archeologický prieskum	

 	

 	

 	
 	
Lokalita 1, km 0,0-0,2 D1	
 	
ks	
1	
25 000 €	
100%	
25 000 €	

 	
 	
Lokalita 2, privádzač Martin	
 	
ks	
1	
25 000 €	
100%	
25 000 €	

 	

 	

 	

 	
 	
Prieskumy na stavbe celkom	

 	

50 000 €	

 	

 	

 	

2	
 	
PRÁCE	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
1	
Výrub stromov	
 	
m	
16 405	
540 849 €	
100%	
540 849 €	

 	

 	

 	

 	
2	
Prístupové komunikácie	

 	

 	

 	
1	
obj.802-11 Prístupová komunikácia k mostu Dubná Skala	

 	

 	

 	
 	
Odstránenie ornice	
 	
m	
1 420	
6 818 €	
100%	
6 818 €	

 	
 	
Zemné práce	
 	
m	
1 420	
210 805 €	
100%	
210 805 €	

 	
2	
obj.804-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)

 	

 	

 	

Odstránenie ornice	
 	
m	
2 278	
1 145 €	
100%	
1 145 €	

 	
 	
Zemné práce	
 	
m	
2 278	
113 914 €	
100%	
113 914 €	

	

	

	

	

	

	
	
15/10/09  -  30/04/10 *	

Položka	

	

	

	

	
 	
Jednotka	
Množstvo pre 100%	
Celková cena	
%	
Množstvo	

	

 	

 	

	
	
3	
Zemné práce	

	

	

 	
 	
Demolácie: obj.001-00 (sklad v km 0,248; skleník v km 0,270; studňa v km 0,279; budova v km 0,279; sklad v km 0,285; budova v km 1,7 privádzača Martin; dom v km 7,875; objekty v km 7,875; záhradný domček v km 7,719; sklad v km 8,692; betónová skruž v km 9,022; sklad v km 9,318; objekt v km 9,373; dom v km 12,086)	
 	
ks	
14	
201 000 €	
100%	
201 000 €	

 	
 	
Odstránenie ornice: obj.101-00  Diaľnica D1, km 2.4-3.0 a obj.111-00 Privádzač Martin km 0.6-1.2	
 	
m	
1 200	
12 653 €	
100%	
12 653 €	

 	

 	

 	

 	
 	
4	
Výkopy	

 	

 	

 	
 	
Výkop obj.101-00, km 2.4-3.0	
 	
m3	
55 122	
256 000 €	
100%	
256 000 €	

 	
 	
Výkop obj.111-00 km 0.6-1.2	
 	
m3	
45 170	
162 699 €	
100%	
162 699 €	

 	

 	

 	

 	
 	
5	
Násypy	

 	

 	

 	
 	
Násyp obj.101-00, km 2.4-3.0	
 	
m3	
126 245	
346 631 €	
100%	
346 631 €	

 	
 	
Násyp obj.111-00 km 0.6-1.2	
 	
m3	
38 207	
446 486 €	
100%	
446 486 €	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	
 	
Práce spolu	

 	

2 299 000 €	

 	

 	

 	

 	

CELKOM SPOLU	

 	

2 349 000 €	

*	
Za predpokladu začiatku  Prípravných prác Fáza 1 15. októbra 2009	

										

D1 - Úsek č. 2: TURANY – HUBOVÁ	
Prípravné práce Fáza 1	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/10/09  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	200 000 €	100%	200 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita 7, km 9,5 diaľnice D1	 	ks	1	50 000 €	100%	50 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Prieskumy na Stavenisku celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	250 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1		Výrub stromov	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	obj.101-00 Diaľnica D1, km 3,3-13,575	 	m	13 576	2 614 937 €	85%	2 222 696 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2	 	Prístupové komunikácie (odstránenie ornice, zemné práce, štrkodrva hr. 0,10 m)	 	 	 	 	 	
 	 		obj. 801-00 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Rojkov, km 7,2-7,5		m	217	91 133 €	80%	72 906 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 		obj. 803-00 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Havran, km 9,3-9,7 		m	212	50 052 €	80%	40 042 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 		obj.804-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Havran, km 12,6-13,1   		m	803	267 776 €	36%	96 399 €	

								15/10/09  -  30/04/10 *	
	Položka				Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
								%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3	 	Zemné práce	 	 	 	 	 	 	
 	 	3.1	obj.101-00, km 4,6-5,4; km 6,3-6,6	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	odstránenie ornice	 	m2	85 800	65 000 €	100%	65 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	3.2	obj.020-00 Úprava plôch zariadenia Staveniska, km 9,3-9,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	odstránenie ornice	 	m2	11 000	153 254 €	100%	153 254 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	násypy	 	m3	4 000	26 000 €	100%	26 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	výkopy	 	m3	4 000	12 240 €	100%	12 240 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spevnenie plochy; niektoré betónové základy	 	m2	60 000	883 677 €	86%	759 962 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Práce spolu (bez DPH)	 	 	 	 	 	3 448 500 €	

 	 	 	CELKOM SPOLU (bez DPH)	 	 	 	 	 	3 698 500 €	
										
		*	Za predpokladu začiatku Prípravných prác Fáza 1 15. októbra 2009				

D1 - Úsek č. 3: HUBOVÁ - IVACHNOVA	
Prípravné práce Fáza 1	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/10/09  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cen		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	100 000 €	100%	100 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita Chránené Nálezisko Mohylky, severne v km 10,8 km na diaľnici D1	ks	1	25 000 €	100%	25 000 €	
 	 	 	Lokalita  blízko Likavka Hrad , severne v km 7,5 km na diaľnici D1	ks	1	25 000 €	100%	25 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Prieskumy na stavbe celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	150 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Výrub stromov	0,0 - 4,0 a 6,0 - 15,3 km	m	13 300	136 658 €	80%	109 326 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2	Prístupové komunikácie k mostom (odstránenie ornice, zemné práce, štrkodrva)	 	 	 	 	 	
 	 	 	K mostu objekt  201-00	Most na diaľnici D1, km 0,411-0,849	m	850	50 232 €	100%	50 232 €	
 	 	 	K mostu objekt  204-00	Most na diaľnici D1, km 1,800-2,124	m	738	40 262 €	100%	40 262 €	
 	 	 	K mostu objekt  207-00	Most na diaľnici D1, km 3,186-3,671	m	749	40 706 €	100%	40 706 €	
 	 	 	K mostu objekt  210-00	Most na diaľnici D1, km 6,465-7,036 nad  I/59	m	820	51 447 €	100%	51 447 €	
 	 	 	K mostu objekt  214-00	Most na, km 9,814-10,498	m	720	55 187 €	100%	55 187 €	
 	 	 	K mostu objekt  216-00	Most nad ZSR, Cesta III/018104 a rieku Váh v km 12,309-12,910	m	729	51 563 €	100%	51 563 €	

					 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
	Položka				Jednotka
	Množstvo 100%
	Celková cena
		
								%	Množstvo	
										
 	3	Prekládky sietí	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 Objekt 601-00 Prekládka káblovej prípojky NN k amfiteátru	ks	1	6 605 €	100%	6 605 €	
									
 	 	 	Objekt 520-00 Prekládka vodovodu DN 110 v km 2,400	ks	1	83 264 €	100%	83 264 €	
									
 	 	 	Objekt 521-00 Prekládka vodovodu DN 50 v km 6,215	ks	1	87 787 €	100%	87 787 €	
									
 	 	 	Objekt 522-00 Prekládka vodovodu DN 250 v km 6,840	ks	1	220 292 €	100%	220 292 €	
									
 	 	 	Objekt 523-00 Prekládka vodovodu DN 100 v km 7,074	ks	1	27 647 €	100%	27 647 €	
									
 	 	 	Objekt 524-00 Prekládka vodovodu DN 150 v km 8,088	ks	1	36 201 €	100%	36 201 €	
									
 	 	 	Objekt 525-00 Prekládka vodovodu DN 80 v km 8,944	ks	1	22 882 €	100%	22 882 €	
									
 	 	 	Objekt 526-00 Prekládka vodovodu DN 150 v km 9,435	ks	1	70 998 €	100%	70 998 €	
									
 	 	 	Objekt 527-00 Prekládka vodovodu DN  80 v km 4,017 	ks	1	85 539 €	100%	85 539 €	
									
 	 	 	Objekt 529-00 Prekládka vodovodu DN 100 v km 11,117 	ks	1	73 527 €	100%	73 527 €	

							15/10/09  -  30/04/10 *	
	Položka			Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
				 	 	 	%	 Množstvo	
									
 	4	Prístupové cesty	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 123-01 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Čebrať	ks	1	326 375 €	55%	179 506 €	
									
			Objekt 123-02 Prístupová cesta k lávke nad diaľnicou D1	ks	1	2 126 386 €	19%	413 564 €	
									
 	 	 	Objekt 142-01 Prístupová cesta k pilieru mosta obj.201-00	ks	1	452 566 €	54%	244 386 €	
									
 	 	 	Objekt 142-02 Úprava existujúcej lesnej cesty	ks	1	433 338 €	2%	10 572 €	
									
 	 	 	Objekt 142-03 Úprava poľnej cesty pri východnom portáli tunela Čebrať	ks	1	167 880 €	15%	24 698 €	
									
 	 	 	Objekt 142-07 Prístupová cesta k mostu obj.216-00 v km 11,6 diaľnice D1	ks	1	208 889 €	60%	125 333 €	
									
 	5	Zemné práce	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Odstránenie ornice  na diaľnici D1 od 0,000 do 4,000	m	4 000	290 282 €	38%	108 856 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 	 	výkop (od 0 do 0,4; od 2,15 do 3,225; od 3,65 do 4,025)	m3	38 172	746 847 €	6%	42 944 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	násyp (od 0 do 0,4; od 2,15 do 3,225; od 3,65 do 4,025)	m3	20 682	1 034 096 €	3%	35 676 €	

 	 	 	Celkom práce (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 299 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 449 000 €	
										
		*	Za predpokladu začiatku Prípravných prác Fáza 1 15. októbra 2009				

D1 - Úsek č. 4: JÁNOVCE - JABLONOV	
Prípravné práce Fáza 1	
										
 	 	 	 	 	 	 	 	15/10/09  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	200 000 €	100%	200 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokality 1 a 2	km 1,60 - 1,80	ks	1	5 000 €	100%	5 000 €	
 	 	 	Lokality 10, 11 a 12	km 10,40 - 11,10	ks	1	25 000 €	100%	25 000 €	
 	 	 	Lokality 13 a 14	km 13,50 - 14,00	ks	1	20 000 €	100%	20 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Prieskumy na Stavenisku celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	250 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Výrub stromov	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	km 0,0-13,7	 	m	13 700	70 000 €	100%	70 000 €	
										
 	 	 	km 13,7-15,2	 	m	1 500	427 649 €	100%	427 649 €	
										
 	 	 	km 15,2-KÚ	 	m	3 340	50 000 €	100%	50 000 €	

							

						15/10/09  -  30/04/10 *	
	Položka		Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
						%	Množstvo	
								
 	2	Prístupové komunikácie k portálom tunela Šibenik (bez vozovky a súvisiacich dokončovacích prác)	 	 	 	 	 	
 	 	2.1	obj.804-00 Prístupová cesta na Stavenisko km 10,3-11,4 diaľnice D1 (západný portál)	m	1180	388 987 €	41%	159 713 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	2.2	obj.805-00 Prístupová cesta na stavenisko km 13,55 diaľnice D1 (východný portál)
 	m	570	304 591 €	56%	169 986 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3	Zemné práce	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	odstránenie ornice	 	m	2 500	941 002 €	90%	846 902 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Práce spolu (bez DPH)	 	 	 	 	 	1 724 250 €	

 	 	 	CELKOM SPOLU (bez DPH)	 	 		1 974 250 €	
										
		*	Za predpokladu začiatku Prípravných prác Fáza 1  15. októbra 2009				

D1 - Úsek č. 5: FRIČOVCE - SVINIA	
Prípravné práce Fáza 1	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/10/09  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka
	Množstavo na 100%
	Celková cena
	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	u	1	100 000 €	100%	100 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita 2	 	u	1	50 000 €	100%	50 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Celkové prieskumy na Stavenisku (bez DPH)	 	 	 	 	 	150 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Výrub stromov	 	m	11 217	328 276 €	100%	328 276 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5	Prekládky sietí	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	6	Prístupové komunikácie	 	 	 	 	 	 	
 	 	6.1	obj.110-00 Prístupová cesta v km 80,4 diaľnice D1 (odstránenie ornice, zemné práce)	m	470	133 928 €	100%	133 938 €	
 	 	6.2	obj.111-00 Prístupová cesta v km 81,2 diaľnice D1 (odstránenie ornice, zemné práce)	m	1 257	604 350 €	50%	302 175 €	
 	 	6.3.	obj.113-00 Prístupová cesta v km 81,9 diaľnice D1 (odstránenie ornice, zemné práce)	m	285	83 026 €	100%	83 026 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/10/09  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka
	Množstavo na 100%
	Celková cena
	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	6.4.	obj.114-00 Prístupová cesta v km 82,6 diaľnice D1 (odstránenie ornice, zemné práce)	m	353	301 069 €	65%	195 695 €	
 	 	6.5.	obj.115-00 Prístupová cesta v km 83,5 diaľnice D1 (odstránenie ornice, zemné práce)	m	439	96 101 €	100%	96 101 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	7	Zemné práce
	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Odstránenie ornice, km 79,683 - 84,500	m	4 900	239 666 €	100%	239 666 €	
 	 	 	Odstránenie ornice, km 84,500 - 90,900	m	6 400	373 697 €	35%	130 794 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Zariadenia Staveniska (zemné práce, štrkodrva, betónové panely) v km 83,7; 84,3; 87,1; 88,6
	u	4	330 121 €	65%	214 579 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Práce celkom (bez DPH)		 	 	 	 	 	1 724 250 €	

 	 	CELKOVÝ SÚČET (bez DPH)		 	 	 	 	 	1 874 250 €	

		*	Za predpokladu začiatku Prípravných prác Fáza 1 15. októbra 2009	

Časť B
Zoznam jednotlivých položiek  – Prípravné práce Fáza 2
	D1 - Úsek č. 1: DUBNÁ SKALA - TURANY 	
	Prípravné práce Fáza 2
	
 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 * 	
	Položka			 	Jednotka
	Množstvo 100%
	Celková cena
		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUM NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	100 000 €	100%	100 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita 3 - v km 10,7 až 11,3	 	ks	1	120 000 €	100%	120 000 €	
 	 	 	Lokalita 4 - v km 15,0 až 16,4	 	ks	1	127 000 €	100%	127 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Celkové prieskumy na Stavenisku (bez DPH)	 	 	 	 	 	347 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Stavebný dvor SD1 v km 1,1 + Stavebný dvor SD2 v km 4,6	 	ks	2	250 000 €	20%	50 000 €	
 	2	Cesty	 	 	 	 	 	 	
 	 	1	Odstránenie ornice: obj.101-00  Diaľnica D1, km 3.9-4.6 a obj.111-00 Privádzač Martin km 1.3-1.75	 	m	1 150	65 524 €	100%	65 524 €	
										
		2	Výkopy							
			Výkop obj.101-00, km 3.9-4.6		m3	41 500	388 072 €	100%	388 072 €	
			Výkop obj.111-00 km 1.3-1.75		m3	40 550	289 511 €	100%	289 511 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 * 	
	Položka			 	Jednotka
	Množstvo 100%
	Celková cena
		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
		3	Násypy							
			Násyp obj.101-00, km 3.9-4.6		m3	41 500	123 389 €	100%	123 389 €	
			Násyp obj.111-00 km 1.3-1.75		m3	23 500	188 573 €	100%	188 573 €	
										
 	 	4	133-00 Poľná cesta v km 2,175 - 2, 745 diaľnice D1 vľavo (bez asfaltovej vrstvy)	 	m	570	246 119 €	80%	196 795 €	
 	 	5	135-00 Preložka poľnej cesty v km 3,040 - 3,285 diaľnice D1 vľavo (bez asfaltovej vrstvy)	 	m	245	60 986 €	79%	48 011 €	
 	 	6	201-00 Most v km 0,400 diaľnice D1 - Dubná Skala (Zakladanie 900 m3 - 6 ks v II. Dilatačnom celku)	 	ks	37	1 154 583 €	36%	408 788 €	
 	 	7	205-00 Most v km 4,823 diaľnice D1 cez Váh (Zakladanie 540 m3 - 2 ks)	 	ks	10	1 838 101 €	31%	562 333 €	
 	 	8	206-00 Lávka pre peších a OA - Turčianske Kľačany (Zakladanie 150 m3 - 2 ks)	 	ks	4	380 504 €	67%	254 499 €	
		9	Prístupová cesta k stav. dvoru 1 (Lipovec) (Komplet v km 1,1 - 1,4)	 	m	1 400	159 522 €	35%	56 490 €	
		10	Prístupová cesta k stav. dvoru 2 (Turč. Kľač.) (Komplet v km 0,0 - 0,3 bez asfaltovej vrstvy)	 	m	2 670	421 966 €	63%	267 016 €	

 	 	 	Práce celkovo (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 899 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			Celkom (bez DPH)						3 246 000 €	

	* Za predpokladu, že Prípravné práce Fáza 2 začnú v súlade s článkom 3.1 tohto Dodatku

D1 - Úsek č. 2: TURANY – HUBOVÁ
Prípravné práce Fáza 2

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	 	 	300 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2	Archeologický prieskum, lokalita 1 (km 0,0–0,5); 2 (km 1,0–2,0); 3 (km 2,2–2,6); 
4 (km 2,7-2,9); 5 (km 3,5-4,0); 6 (km 6,6-7,2); 8 (km12,5-13,5); 9 (km 9,4-9,7)	 	ks	8	 	 	205 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Prieskumy na Stavenisku celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	505 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	 	Všeobecné položky	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Zariadenie Staveniska	 	ks	1	18 786 900 €	0,4%	70 000 €	
 	 	 	Elektrické prípojky pre stavebný dvor obj. 203-00, 206-00, zárubné múry km 5,0-6,0, obj.401-01, km 9,5, obj.402-01,obj.402-02 (časti objektov)	 	 	 	 	 	 	
 	2	 	Demolácie	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	010-00 Demolácia hospodárskeho objektu pri dome č.1 v Šútove	 	ks	1	16 226 €	100,0%	16 226 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3	 	Úprava plôch pre zariadenie Staveniska	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	020-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska, km 9,5 diaľnice D1 – panelová plocha	 	ks	1	2 789 588 €	2,5%	70 000 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	4	 	Výrub stromov (mimo koreňov)	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	101-00 Diaľnica D1, km 0,00 – 3,30	 	m	3 300	600 000 €	100,0%	600 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	5	 	Prístupové komunikácie (odstránenie ornice, zemné práce, štrkodrva 0,10 m)	 	 	 	 	 	
 	 		801-00 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Rojkov, km 7,2-7,5		ks	1	114 242 €	36,2%	41 335 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 		803-00 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Havran, km 9,3-9,7 		ks	1	62 744 €	36,2%	22 703 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 		804-00 Prístupová cesta tk východnému portálu tunela Havran, km 12,6-13,1   		ks	1	335 678 €	35,1%	117 983 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	810-00 Dočasný most na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Havran - zriadenie 	 	ks	1	846 325 €	13,6%	115 025 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	832-02 Úprava cesty I/18 pri železničnom priecestí v žkm 299,959 	 	ks	1	165 674 €	100,0%	165 674 €	
 	 		 		 		 	 	 	
 	 	 	832-03 Úprava železničného priecestia v km 299,959	 	ks	1	275 059 €	100,0%	275 059 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	6	 	Zemné práce	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	101-00 Diaľnica D1, km 3,4-4,00	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Odstránenie a uloženie ornice	 	m2	183 780	300 859 €	8,6%	26 000 €	
 	 	 	Výkopy	 	m3	598 059	5 001 147 €	2,1%	103 000 €	
 	 	 	Násypy	 	m3	942 871	1 537 972 €	1,0%	16 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	130-00 Obslužná komunikácia k tunelom v km 9,550 diaľnice D1	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Výkopy	 	m3	1 345	15 111 €	100,0%	15 111 €	
 	 	 	Násypy	 	m3	86 000	1 360 104 €	2,9%	39 410 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	171-00 Úprava lesného chodníka v km 9,550 diaľnice D1	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Výkopy	 	m3	984	23 009 €	100,0%	23 009 €	
 	 	 	Násypy	 	m3	49 586	659 235 €	2,5%	16 525 €	
									
 	7	 	Mosty	 	 	 	 	 	
 	 	 	203-00 Most Šútovo - zakladanie 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - základ č.7 a 8: výkopy vrátane štetovníc, mikropilóty	ks	1	2 793 317 €	4,2%	116 425 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	206-00 Most Malá Fatra – zakladanie	 	 	 	 	 	
 	 	 	- zakladanie pre 2 základy (výkopy vrátane štetovníc, mikropilóty), ž.b. základ (1 ks)	ks	1	5 982 147 €	4,6%	276 885 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	214-00 Most nad traťou ŽSR na obslužnej komunikácii - zakladanie	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkopy, ž.b. základy	ks	1	79 124 €	75,9%	60 060 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	8	 	Múry	 	 	 	 	 	
 	 	 	239-00 Zárubný múr v km 3,310 - 3,660 diaľnice D1 vľavo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - striekaný betón, klince	ks	1	1 466 504 €	3,1%	45 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	247-00 Zárubný múr v km 7,376 - 7,472 diaľnice D1 vpravo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkop, striekaný betón, klince	ks	1	125 494 €	20,3%	25 489 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	248-00 Zárubný múr v km 12,559 - 12,754 diaľnice D1 vľavo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkop, striekaný betón, klince	ks	1	1 221 742 €	3,5%	42 840 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	255-00 Zárubný múr v km 5,400 diaľnice D1 vpravo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkop, klince, mikropilóty	ks	1	2 327 986 €	2,0%	47 150 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	256-00 Zárubný múr v km 5,800 D1 vpravo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkop, striekaný betón, klince	ks	1	542 452 €	8,6%	46 595 €	

257-00 Zárubný múr v km 6,150 D1 vpravo	 	 	 	 	 	
 	 	 	 -  výkop, striekaný betón, klince	ks	1	741 419 €	5 3%	39 000 €	

									

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	

 	9	 	Tunely	 	 	 	 	 	
 	 	 	401-01 Západný portál tunela Rojkov	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkopy, klince, mikropilóty	ks	1	1 583 547 €	5,1%	81 000 €	

 	 	 	402-01 Západný portál tunela Havran	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkopy, klince, mikropilóty	ks	1	1 289 881 €	6,3%	81 000 €	

 	 	 	402-02 Východný portál tunela Havran	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - výkopy, klince, mikropilóty	ks	1	2 027 624 €	4,0%	81 000 €	

 	10	 	Prekládky sietí	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	515-00 Prekládka vodovodu LT DN150, km 6,650 - 6,850	m	420	475 290 €	35,8%	170 179 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 		604-00 Prekládka 2x220 kV linky č. 281/282, km 12,700		m	273	486 235 €	10,3%	50 000 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 		613-00 Prekládka of HV-22 kV linky č. 210, km 4,085		m	173	190 474 €	52,5%	100 000 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 		616-00 Prekládka 22 kV linky č. 243, km 9,200		m	202	90 995 €	100,0%	90 995 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 	 	617-00 Prekládka 22 kV linky č. 257, km 12,600 - 12,900	m	526	84 171 €	100,0%	84 171 €	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
 	 	 	645-00 Úprava trakčného vedenia pod mostom 214-00, dočasný stav	ks	1	177 654 €	100,0%	177 654 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	647-00 Úprava trakčného vedenia pod mostom 213-00, dočasný stav	ks	1	259 992 €	53,9%	140 110 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	646-00.11 Úprava zabezpečovacieho zariadenia	ks	1	105 932 €	100,0%	105 932 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka		 	Jednotka	Množstvo pre 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Amount	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	646-10 Izolované styky pre most 214-00	ks	2	65 388 €	100,0%	65 388 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	648-00 Prekládka 6 kV kábla ŽSR	 	m	777	59 168 €	59,2%	35 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	658-00 Prekládka diaľkového kábla ST v km 6,200 - 6,700 D1	m	1 340	125 754 €	100,0%	125 754 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	659-00 Prekládka optického kábla ST v križovatke Kraľovany	m	2 510	71 529 €	100,0%	71 529 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	660-00 Prekládka optického kábla VET v križovatke Kraľovany	m	1 255	33 364 €	100,0%	33 364 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	665-00 Prekládka DK a TKK ŽSR v km 9,570 D1	m	460	113 421 €	100,0%	113 421 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	701-00 Prekládka STL plynovodu D90 v km 1,150	m	215	85 833 €	81,6%	70 000 €	
 	 	 	569-00 Úprava toku Váhu v km 6,400	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 - opevnenie brehov	 	m3	5 776	524 916 €	15,2%	80 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	572-00 Úprava bezmenného potoka v km 12,55	 	m	190	31 422 €	79,6%	25 000 €	

 	 	 	Práce spolu (bez DPH)	 	 	 	 	 	4 214 000 €	

 	 	 	CELKOM SPOLU (bez DPH)	 	 	 	 	 	4 719 000 €	

* Za predpokladu, že Prípravné práce Fáza 2 začnú v súlade s článkom 3.1 tohto Dodatku

D1 - Úsek č. 3: HUBOVÁ - IVACHNOVA	
Prípravné práce Fáza 2 	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka	Množstvo 100%	Celková cena		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	185 000 €	100%	185 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita Malý Hrádeček km 3,0 - 3,3 km 	ks	1	250 000 €	100%	250 000 €	

 	 	Celkovo prieskumy na Stavenisku (bez DPH)	 	 	 	 	 	435 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Rúbanie stromov	0,0 do 4,0 a 6,0 do 15,3 km	m	13 300	136 658 €	20%	27 332 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	4	Prístupové komunikácie	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 123-01 Prístupová cesta k západnému portálu tunela Čebrať	ks	1	326 375 €	20%	65 275 €	
 	 	 	Objekt 123-02 Prístupová cesta k lávke nad diaľnicou D1	ks	1	2 126 386 €	56%	1 190 764 €	
 	 	 	Objekt 142-01 Prístupová cesta k pilieru mosta obj.201-00	ks	1	452 566 €	46%	208 181 €	
 	 	 	Objekt 142-03 Úprava poľnej cesty pri východnom portáli tunela Čebrať 	ks	1	167 880 €	20%	33 576 €	
 	 	 	Objekt  142-07 Prístupová cesta k mostnému objektu 216-00 v km 11,6 D1 	ks	1	208 889 €	40%	83 556 €	

	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka			 	Jednotka
	Množstvo 100%
	Celková cena
		
 	 	 	 	 	 	 	 	%	Množstvo	
 	6	Mosty	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 201-00 Most na diaľnici D1 v km 0,411 -0,849 zakladanie	ks	1	5 239 155 €	16%	838 265 €	
 	 	 	Objekt 208-00 Most na diaľnici D1 v km 4,006 zakladanie 	 	ks	1	1 061 817 €	15%	164 051 €	

 	 	 	Práce celkovo (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 611 000 €	

 	 	 	Celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	3 046 000 €	
										
			* Za predpokladu, že Prípravné práce Fáza 2 začnú v súlade s článkom 3.1 tohto Dodatku

D1 - Úsek č. 4: JÁNOVCE - JABLONOV	
Prípravné práce Fáza 2	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka
				Jednotka
	Množstvo pre 100%
	Celková cena
		
								%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	ks	1	115 000 €	100%	115 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokality 4 - km 2.5	 	ks	1	19 200 €	100%	19 200 €	
 	 	 	Lokality 5 - km 2.8 	 	ks	1	19 200 €	100%	19 200 €	
 	 	 	Lokality 6 - km 3.1 	 	ks	1	31 500 €	100%	31 500 €	
 	 	 	Lokality 7 - km 3.3 	 	ks	1	31 500 €	100%	31 500 €	
 	 	 	Lokality 8 - km 5.3	 	ks	1	83 900 €	100%	83 900 €	
 	 	 	Lokality 9 - km 5.7 	 	ks	1	19 200 €	100%	19 200 €	
 	 	 	Lokality 15 - km 15.5 	 	ks	1	45 500 €	100%	45 500 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Celkom Prieskumy na Stavenisku (bez DPH)	 	 	 	 	 	365 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Prístupové komunikácie k portálom tunela Šibeník - s predĺžením k portálom (bez vozovky a súvisiacich dokončovacích prác)	 	 	 	 	 	
 	 	1.1	Obj.804-00 Prístupová cesta (západný portál)	m	1 180	388 987 €	20%	77 797 €	
 	 	1.2	Obj.804-01 Prístupová cesta (západný portál)	m	15	26 093 €	100%	26 093 €	
 	 	1.3	Obj.127-01 Prístupová cesta (západný portál)	m	180	26 193 €	100%	26 193 €	
 	 	1.4	Obj.128-00 Prístupová cesta (západný portál)	m	750	1 322 907 €	50%	661 454 €	
 	 	1.5	Obj.660-00 Prístupová cesta (západný portál)	Ks	1	6 310 €	100%	6 310 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka
				Jednotka
	Množstvo pre 100%
	Celková cena
		
								%	Množstvo	
 	 	1.6	Obj.805-00 Prístupová cesta (východný portál)	 	m	570	304 591 €	30%	91 377 €	
 	 	1.7	Obj.130-00 Prístupová cesta (východný portál)	 	m	450	705 263 €	70%	493 684 €	
 	 	1.8	Obj.131-00 Prístupová cesta (východný portál)	 	m	150	223 639 €	30%	67 092 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2	Prekládky sietí	 						
 	 	2.1	Obj.052-00  Úprava meliorácií v km 3,600 - 4,100 D1		1	13 847 €	100%	13 847 €	
 	 	2.2	Obj.053-00  Úprava meliorácií v km 5,400 - 6,700 D1	ks	1	63 862 €	100%	63 862 €	
 	 	2.3	Obj.054-00  Úprava meliorácií v km 6,900 - 7,850 D1	ks	1	41 954 €	100%	41 954 €	
 	 	2.4	Obj.055-00  Úprava meliorácií v km 10,600 - 11,100 D1	ks	1	10 129 €	100%	10 129 €	
 	 	2.5	Obj.504-00 Úprava vodovodu DN 500 v km 10,335 D1	ks	1	649 800 €	10%	64 980 €	
 	 	2.6	Obj.602-00 Preložka VVN vedenia 2x110 kV, l.č. 6421/6422 v km 13,432 D1	ks	1	468 530 €	25%	117 133 €	
		2.7	Obj. 613-00 -Prekládka 22 kV VN l.č. 202 V km 13,355 D1	ks	1	55 389 €	100%	55 389 €	
 	 	2.8	Obj.641-00 Prekládka TFK Levoča - Kurimany v km 7,270 D1 	ks	1	35 961 €	100%	35 961 €	
 	 	2.9	Obj.642-00 Prekládka TFK Levoča - Dravce v km 9,560 D1	ks	1	80 808 €	30%	24 242 €	
 	 	2.10	Obj.645-00 Prekládka OOK Levoča - Behárovce v km 13,500 - 13,750 D1	ks	1	73 782 €	30%	22 135 €	
 	 	2.11	Obj.652-00 Prekládka DOK Poprad - Sp. N. Ves v km 9,560 D1	ks	1	57 248 €	30%	17 174 €	
 	 	2.12	Obj.702-00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,606 D1	ks	1	276 943 €	10%	27 694 €	
 	 	 	 	 						
 	 	 	Práce spolu (bez DPH)	 	 	 	 	 	1 944 500 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	CELKOM SPOLU (bez DPH)
	 	 	 	 	 	2 309 500 €	

* Za predpokladu, že prípravné práce Fáza 2 začnú v súlade s článkom 3.1 tohto Dodatku

D1 - Úsek č. 5: FRIČOVCE - SVINIA	
Prípravné práce Fáza 2
	
 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka
				Jednotka
	Množstvo pre 100%
	Celková cena
		
								%	Množstvo	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 	PRIESKUMY NA STAVENISKU	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	1	Geotechnický prieskum	 	 	ks	1	100 000 €	100%	100 000 €	
 	2	Archeologický prieskum	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Lokalita 3 – km 84,0 D1, Lokalita 4 – km 87,0 D1	 	ks	2	100 000 €	100%	100 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Celkové prieskumy na Stavenisku (bez DPH)	 	 	 	 	200 000 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	PRÁCE	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	3	Mosty	 	 	 	 	 	 	
 	 		Skúšobné piloty	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 201-00 Most nad vetvou križovatky Fričovce v km 79.8 D1	 	ks	1	29 718 €	100%	29 718 €	
 	 	 	Objekt 202-00 Most nad cestou III/018 189 a Štefanovským potokom v km 80.5 D1	 	ks	1	44 128 €	100%	44 128 €	
 	 	 	Objekt 203-00 Most cez údolie Lazného jarku v km 81.1 D1	 	ks	1	65 683 €	100%	65 683 €	
 	 	 	Objekt 204-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.8 D1 	 	ks	1	72 201 €	100%	72 201 €	
 	 	 	Objekt 206-00 Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.8 D1	 	ks	1	65 683 €	100%	65 683 €	
 	 	 	Objekt 207-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 83.5 D1	 	ks	1	54 400 €	100%	54 400 €	
 	 	 	Objekt 208-00 Most nad cestou I/18 v km 84.2 D1	 	ks	1	128 963 €	100%	128 963 €	
 	 	 	Objekt 209-00 Most cez potok Veľká Svinka v km 84.64 D1	 	ks	1	128 523 €	100%	128 523 €	
 	 	 Objekt 211-00 Most nad cestou III/018 190 a potokom Jakubovianka v km 87.0 D1		ks	1	113 836 €	100%	113 836 €	

 	 	 	 	 	 	 	 	15/02/10  -  30/04/10 *	
 	Položka
				Jednotka
	Množstvo pre 100%
	Celková cena
		
								%	Množstvo	
 	 	 	Objekt 212-00 Most nad cestou III/018 191 v km 88.4 D1 	 	ks	1	74 083 €	100%	74 083 €	
 	 	 	Objekt 213-00 Most cez údolie v km 89.4 D1	 	ks	1	67 997 €	100%	67 997 €	
 	 	 	Objekt 214-00 Most nad vetvou križovatky Svinia  a potokom Veľká Svinka v km 90.4 D1	 	ks	1	115 596 €	100%	115 596 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	3.2.	Základy	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 203-00 Most cez údolie Lazného jarku v km 81.1 D1 	 	ks	1	223 991 €	100%	223 991 €	
 	 	 	Objekt 204-00 Most cez údolie s bezmenným potokom v km 81.8 D1 	 	ks	1	223 991 €	100%	223 991 €	
 	 	 	Objekt 206-00 Most nad cestou III/5439 a Hermanovským potokom v km 82.8 D1 	 	ks	1	223 991 €	100%	223 991 €	
 	 	 	 	 	 		 	 	 	
 	5	Prekládky inžinierskych sieti	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Objekt 661-00 Prekládka telefónneho vedenia	 	ks	1	50 055 €	100%	50 055 €	
 	 	 	Objekt 650-00 Prekládka ďialkového kábla	 	ks	1	48 942 €	100%	48 942 €	
 	 	 	Objekt 651-00 Prekládka optického vedenia	 	ks	1	30 174 €	100%	30 174 €	
 	 	 	Objekt 652-00 Prekládka optického vedenia	 	ks	1	7 279 €	100%	7 279 €	
			Objekt 662-00 Prekládka telefónneho vedenia		ks	1	30 100 €	100%	30 100 €	
			Objekt 663-00 Prekládka telefónneho vedenia		ks	1	27 618 €	100%	27 618 €	
 	 	 	Objekt 664-00 Prekládka telefónneho vedenia	 	ks	1	19 020 €	100%	19 020 €	
 	 	 	 	 	 		 	 	 	
 	7	Zemné práce		 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Demolácie  	 	ks	1	66 309 €	100%	66 309 €	
 	 	 	Zariadenia Staveniska (spevnená plocha)	m2	5000	29 546 €	100%	29 546 €	
 	 	 	Dočasné elektrické prípojky na mostné objekty 202-00, 203-00, 204-00, 206-00, 208-00	ks	5	117 672 €	100%	117 672 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Práce celkom (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 059 500 €	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	CELKOVÝ SÚČET (bez DPH)	 	 	 	 	 	2 259 500 €	

	* Za predpokladu, že Prípravné práce Fáza 2 začnú 15. februára 2010