Title: NÁVRH NA NAVÝŠENIE OBSTARÁVACEJ CENY STAVBY
Author: K33
Last saved by: Sekretariat
Company: Letisko Bratislava

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č.
z ..........................

k návrhu postupu dokončenia stavby 
“Terminál pre cestujúcich – Letisko Košice”

Číslo materiálu:
Predkladateľ:          minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh postupu dokončenia stavby “Terminál pre cestujúcich – Letisko Košice” 

B. súhlasí

B.1. s finančným zabezpečením dokončenia stavby “Terminál pre cestujúcich – Letisko Košice” v roku 2003 z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 60 mil. Sk,

B.2. s presunom 60 mil. Sk v roku 2003 z podprogramu 05406 – Rozvoj a modernizácia majetku železníc do programu 055 – Letecká doprava 

C. ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií 

C.1. aktualizovať register investícií na celkovú obstarávaciu cenu stavby, maximálne však do výšky 507 mil. Sk stanovenej dodatočným expertíznym posudkom 

	T: do 30.10.2003

C.2. presunúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre rok 2003 v rámci programovej štruktúry MDPT SR podľa bodu B.2.

	T: do 30.10.2003

Vykoná:

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií