Author: .
Company: Úrad vlády SR

VLÁDA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

N á v r h  

UZNESENIE
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – dodatok č.1

     

Číslo uznesenia:		 

Zo dňa: 			 

Číslo materiálu:		 

Predkladateľ:	              minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Podnet:                         na základe Plánu práce vlády SR na rok  2000 

Stupeň utajenia:		 

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vláda

A.	schvaľuje

A.1   Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

B.	súhlasí

B.1.   s výdavkami na financovanie Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
               v rozpočtovom roku 2001 v objeme  9,2 mld. Sk

C.	berie na vedomie

C.1.    návrh výdavkov na financovanie Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  v období rokov 2002 – 2004 nasledovne :
           v roku 2002         10,8 mld. Sk
2003	 10,9 mld. Sk
2004	 11,3 mld. Sk

D.  ukladá
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií 
D.1.  plniť harmonogram začatia a dokončenia stavieb uvedených v prílohe č.1 tohto uznesenia vlády, v závislosti od finančného zabezpečenia výstavby v jednotlivých rokoch

D.2     v spolupráci s ministerkou financií hľadať ďalšie dodatočné zdroje na financovanie Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2001
    
D.3   predložiť na rokovanie vlády správu o plnení nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
          do 30. júna 2002

E.  zrušuje

  E.1.  úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 415 zo dňa 9.6.1998 k správe o postupe výstavby diaľnic na území Slovenskej republiky. 

Vykonajú:
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministerka financií
Príloha č.1 k uzneseniu vlády...

Harmonogram začatia a odovzdania  stavieb do užívania
v období 2001 - 2004

rok 2001
Začatie | Dĺžka úseku | Ukončenie | Dĺžka úseku
Názov stavby | (km) | Názov stavby | (km)
D2  Bratislava Lamačská – Staré Grunty | 3,0 | D1   Široké – obchvat II.etapa 2.časť | 5,0
D1  Bratislava Viedenská – Prístav. most | 3,9 | R2   Košice Červený Rak – VSS | 2,8
R1  Nová Baňa  II. etapa | 4,3 | R4   Košice Prešovská –Sečovská I.a | 1,2
R1  Nová Baňa – Rudno | 3,0 | Privádzač Prešov – západ | 1,3
R4  Košice – Prešovská Sečovská II. a III.eta. | 6,3 | |
SPOLU diaľnice | 6,9 | SPOLU diaľnice | 5,0
SPOLU rýchlostné cesty | 13,6 | SPOLU rýchlostné cesty | 4,0
| | SPOLU privádzače | 1,3

rok 2002
Začatie | Dĺžka úseku | Ukončenie | Dĺžka úseku
Názov stavby | (km) | Názov stavby | (km)
R1  Rudno – Žarnovica | 5,2 | D1 Bratislava Mierova – Senecká | 6,5
R1  Budča - Kováčová | 2,9 | D1 Behárovce - Branisko | 7,8
R2  Figa – Tornaľa | 11,2 | D3 Čadca – obchvat | 6,2
R3  Oravský Podzámok obchvat | 6,4 | R4 Košice – Južné nábrežie | 1,7
Privádzač Žilina – juh I. etapa | 2,0 | Privádzač Žilina | 4,7
| | Štôlňa Višňové – Dubná Skala | 7,5
SPOLU diaľnice | - | SPOLU diaľnice | 20,5
SPOLU rýchlostné cesty | 25,7 | SPOLU rýchlostné cesty | 1,7
SPOLU privádzače | 2,0 | SPOLU privádzače | 4,7

rok 2003
Začatie | Dĺžka úseku | Ukončenie | Dĺžka úseku
Názov stavby | (km) | Názov stavby | (km)
D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie | 13,5 | D1 Fričovce – obchvat | 3,2
D1 Višňové – Dubná Skala | 8,1 | Privádzač Trenčín | 2,9
D3 Čadca  (Bukov) - Svrčinovec | 5,6 | Privádzač Púchov | 6,6
D3 Svrčinovec – Skalité | 11,4 | Privádzač Žilina – juh | 2,0
| | R1  Nová Baňa II. etapa | 4,3
SPOLU diaľnice | 38,6 | SPOLU diaľnice | 3,2
| | SPOLU  rýchlostné cesty | 4,3
| | SPOLU privádzače | 11,5

rok 2004
Začatie | Dĺžka úseku | Ukončenie | Dĺžka úseku
Názov stavby | (km) | Názov stavby | (km)
D3  Hričovské Podhradie – Žilina Strážov | 6,9 | D1 Bratislava Viedenská – Prístavný most | 3,9
D1  Sverepec – Považská Bystrica západ | 0,5 | D2  Bratislava Lamačská – Staré Grunty | 3,1
R1  Žarnovica – Šášovské Podhradie I.et. | 17,8 | R1  Nová Baňa – Rudno | 3,0
R2   Ožďany | 6,6 | R1  Rudno – Žarnovica | 5,2
R3  Podbiel – obchvat | 6,1 | R1 Budča – Kováčová | 2,9
SPOLU diaľnice | 7,4 | SPOLU diaľnice | 7,0
SPOLU rýchlostné cesty | 29,5 | SPOLU rýchlostné cesty | 11,1