Title: 1
Author: mazancova
Company: MZP

Príloha

1. Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

Žiadateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) Petržalka a ÚČOV Vrakuňa, konkrétne odstránenie nutrientov – t.j. zníženie celkového dusíka „N celk.“ a celkového fosforu „P celk.“ vo vyčistenej odpadovej vode a vypúšťanej do recipientu.

Indikátory projektu
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“) napojených na zrekonštruovanú ČOV: 635 300

Miesto realizácie projektu
Vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) Bratislavský kraj
okres Bratislava II, Bratislava V
obec Bratislava - Vrakuňa, Bratislava – Petržalka

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Počiatočná správa | 10/2005 | 11/2005
Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2005 | 04/2006
Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 01/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 05/2006 | 01/2007
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2006 | 07/2006
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 08/2006 | 04/2007
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 05/2007 | 08/2008
Formulár žiadosti | 02/2009 | 03/2009
Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 02/2009
Výber zhotoviteľa | 03/2009 | 06/2009
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2009 | 10/2011
Skúšobná prevádzka | 01/2011 | 10/2012
Ukončenie projektu | 10/2012 | 10/2012

Predloženie projektového zámeru veľkého projektu (ďalej len „PZ VP“): 17.12.2008
Schválenie PZ VP: 15.4.2009
Predloženie štúdia uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“): 2.6.2009
Schválenie ŠU: 6.10.2009

2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Žiadateľ
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Výstavba nových splaškových stokových sietí, rozšírenie a intenzifikácia ČOV

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 161 456
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 21 295
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 39 464

Miesto realizácie projektu
VÚC Žilinský kraj
okres Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
obec Rabča, Sihelné, Oravská Polhora, Vavrečka, Oravské Veselé, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Nižná, Dolný Kubín
Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)

03/2004

04/2004

Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)

07/2004

11/2004

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)

03/2004

08/2004

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)

08/2004

08/2005

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Vavrečka – kanalizácia

06/2008

10/2008

Štúdia uskutočniteľnosti | 04/2008 | 08/2009
Analýza nákladov a výnosov | 08/2009 | 09/2009
Formulár žiadosti | 10/2009 | 11/2009
Príprava súťažných podkladov | 01/2010 | 04/2010
Výber zhotoviteľa | 04/2010 | 09/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 10/2010 | 09/2013
Skúšobná prevádzka | 10/2012 | 09/2013
Ukončenie projektu | - | 03/2014
Predloženie PZVP: 14.10.2008
Schválenie PZVP: 18.3.2009
Predloženie ŠU: 2.6.2009
Schválenie ŠU: 15.10.2009
3. KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier 

Žiadateľ
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd - Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 28 178,1
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 118
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 50 388/172 569

Miesto realizácie projektu
VÚC Košický kraj, Prešovský kraj
okres Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves
obec Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 2006 | 2006
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 2006 | 2006
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2009 | 2009
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 2009 | 2010
Štúdia uskutočniteľnosti | 2009 | 2009
Analýza nákladov a výnosov | 2009 | 2009
Formulár žiadosti | 2009 | 2009

Príprava súťažných podkladov na práce a               
služby

2009

2010

Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (FIDIC CONS) | 2010 | 2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia | 2010 | 2012
Skúšobná prevádzka | 2012 | 2013
Ukončenie projektu | 2013 | 2013

Predloženie PZVP: 22.12.2008
Schválenie PZVP: 15.04.2009
Predloženie ŠU: 9.11.2009
Zaslanie žiadosti o zapracovanie pripomienok do ŠU: 14.12.2009

4. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

Žiadateľ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (rekonštrukcia ČOV Bytča, splašková kanalizácia v mestských častiach Bytče - Hliník nad Váhom, Malá Bytča, v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica) a kanalizačné odbočky pre ďalšie napojenie.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 66 278,68
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 66 552,35
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 9 602
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 648
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 43 103

Miesto realizácie projektu
VÚC Žilinský kraj
okres Bytča
obec Veľká Bytča, Malá Bytča, Hliník na Váhom, Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica, Štiavnik, Pšurnovice

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie

Štúdia uskutočniteľnosti

02/2004

05/2004
(Revidovaná 2009)

Analýza nákladov a výnosov

02/2004

05/2004
(Revidovaná 2009)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2004 | 05/2004
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 02/2004 | 05/2004
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2003 | 2005
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2004 | 09/2004
Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009
Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 09/2009
Výber zhotoviteľa | 10/2009 | 02/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2010 | 05/2013
Skúšobná prevádzka | 05/2013 | 05/2014
Ukončenie projektu | 05/2014 | 12/2014

Predloženie PZ VP: 30.10.2008 
Schválenie PZ VP: 18.3.2009

5. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Žiadateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ciele projektu
Intenzifikácia ČOV Dubnica nad Váhom, prebudovanie ČOV Ilava na čerpaciu stanicu, výstavba kanalizácie (obce Prejta, Klobušice, Ilava, Košeca, Ladce-Tunežice, Ladce, Malý a Veľký Kolačín, rozšírenie vodovodnej siete.
Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 13 891
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 47 908
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 222
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 6 070
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 44 792
Miesto realizácie projektu
VÚC Trenčiansky
okres Ilava
obec Dubnica nad Váhom, Prejta, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Ilava, Klobušice, Ladce, Košeca.
Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie

Štúdia uskutočniteľnosti

04/2004
Nová verzia 05/2009

12/2007
(Revidovaná 08/2009)

Analýza nákladov a výnosov

10/2007

12/2007
(Revidovaná 03/2009)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 06/2004 | 10/2004
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 07/2007 | 02/2008
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 03/2004
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 06/2007 | 09/2007
Formulár žiadosti | 10/2009 | 11/2009
Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 11/2009
Výber zhotoviteľa | 03/2010 | 06/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2010 | 11/2012
Skúšobná prevádzka | 12/2012 | 11/2013
Ukončenie projektu | 12/2013 | 03/2014

Predloženie PZVP: 6.10.2008
Schválenie PZVP: 18.3.2009
Predloženie ŠU: 2.6.2009
Schválenie ŠU: 7.9.2009 
Predloženie ŽoPP: 2.12.2009
6. Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

Žiadateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Rozšírenie vodovodných sietí do nových obcí (Dohňany, Mestečko, Púchov), vybudovanie skupinovej splaškovej kanalizácie pre 7 sídiel riešeného územia, intenzifikácia jestvujúcej ČOV Púchov – Strežnice.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 30 497
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 65 533
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 2 027
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 7 559
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 22 631

Miesto realizácie projektu
VÚC Trenčiansky kraj
okres Púchov
obec Dohňany, Dolné Kočkovce, Mestečko, Púchov, Strežnice, Záriečie, Beluša, Nimnica

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2007 | 02/2008
Analýza nákladov a výnosov | | 02/2008
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2008 | 03/2008
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 03/2008 | 06/2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 02/2003 | 07/2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 07/2008 | 11/2008
Formulár žiadosti | 11/2008 | 10/20010
Príprava súťažných podkladov | 11/2010 | 01/2011
Výber zhotoviteľa | 01/2011 | 03/2011
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 04/2011 | 09/2013
Skúšobná prevádzka | 09/2013 | 09/2014
Ukončenie projektu | 09/2014 | 03/2015

Predloženie PZ VP: 24.10.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009

7. Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami
Žiadateľ
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu je podpora trvalo-udržateľného a harmonického rozvoja mesta  a širšej oblasti stabilizáciou podmienok sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rastu v priaznivom životnom prostredí zabezpečením ochrany územia pred povodňami. Opatrenie charakterom svojho technického riešenia patrí do skupiny B. „výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd“ I. skupiny: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu  pred povodňami Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami Operačného programu Životné prostredie. Naliehavosť vykonania protipovodňovej ochrany vychádza z uznesenia vlády SR č. 25/2003, národných strategických dokumentov, ako aj významnosti mesta Banská Bystrica. 
Indikátory projektu
Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou: 1,01 km^2
Miesto realizácie projektu
VÚC Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
obec Banská Bystrica
Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2004 | 02/2009
Analýza nákladov a výnosov | 08/2004 | 04/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 07/2004 | 02/2005
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2007 | 05/2008
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 09/2004 | 05/2005
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2011 | 07/2011
Formulár žiadosti | 04/2009 | 07/2009
Príprava súťažných podkladov | 03/2010 | 05/2010
Výber zhotoviteľa | 06/2010 | 01/2011
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 02/2011 | 02/2015
Skúšobná prevádzka | 03/2015 | 05/2015
Ukončenie projektu | 03/2015 | 08/2015
Predloženie PZ VP: 11.9.2008  
Schválenie PZ VP: 21.1.2009 
Predloženie ŠU: 17.6.2009
Schválenie ŠU: 18.11.2009 
8. Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza 

Žiadateľ
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 6 aglomeráciách (Prievidza, Kanianka, Nitrianske Pravno, Sebedražie, Chrenovec - Brusno, Nedožery - Brezany); intenzifikácia ČOV v Prievidzi.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 117 598
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 18 233
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 76 438

Miesto realizácie projektu
VÚC Trenčiansky kraj
okres Prievidza
obec Prievidza, Bojnice, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nedožery - Brezany, Poruba, Lazany, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cígeľ, Sebedražie, Koš, Kocúrany, Opatovce n/Nitrou

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 10/2009
Analýza nákladov a výnosov | - | 12/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2006 | 06/2006
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 03/2006 | 12/2006
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2006 | 12//2006
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2007 | 12/2007
Formulár žiadosti | - | 12/2009
Príprava súťažných podkladov | - | 01/2010
Výber zhotoviteľa | - | 03/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 06/2010 | 12/2013
Skúšobná prevádzka | 08/2014 | 08/2015
Ukončenie projektu | 09/2015 | 09/2015

Predloženie PZVP: 3.11.2008
Schválenie PZVP: 18.03.2009
Predloženie ŠU: 14.07.2009
Schválenie ŠU: 27.10.2009

9. Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Žiadateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu
Zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Trenčianskom regióne.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 26 051
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 48 338
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 121
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 645
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 4 927/ 94 118

Miesto realizácie projektu
VÚC Trenčiansky kraj
okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom
obec Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Omšenie, Podolie, Pobedim, Očkov, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie

Štúdia uskutočniteľnosti

09/2006
Nová verzia 03/2009

09/2009

Analýza nákladov a výnosov | 01/2009 | 11/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 09/2006 | 03/2009
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 12/2008 | 08/2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 12/2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 11/2006 | 03/2009
Formulár žiadosti | 10/2009 | 02/2010
Príprava súťažných podkladov | 10/2009 | 03/2010
Výber zhotoviteľa | 04/2010 | 09/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 10/2010 | 10/2013
Skúšobná prevádzka | 11/2013 | 11/2014
Ukončenie projektu | 11/2014 | 05/2015

Predloženie PZ VP: 30.10.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009
Predloženie ŠU: 2.6.2009
Schválenie ŠU: 2.9.2009
Predloženie ŽoPP: 15.12.2009 

10. Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany

Žiadateľ
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Zásobovanie vodou (Bašovce), odkanalizovanie (Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Veselé, Veľké Kostoľany, Podolie a Ostrov) a čistenie odpadových vôd (ČOV Krakovany, Veľké Kostoľany, Veselé, Dechtice).

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 3 782
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 37 051
Počet novovybudovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 345
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 6 074
Počet EO napojených na novovybudovanú ČOV: 16 143

Miesto realizácie projektu
VÚC Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
okres Trnava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom
obec Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Vrbové, Veselé, Borovce,
Dubovany, Veľké Kostoľany, Podolie, Očkov, Bašovce, Ostrov

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 06/2009
Analýza nákladov a výnosov | 04/2009 | 06/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2009 | 06/2009
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 01/2009 | 06/2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 12/2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2006 | 02/2009
Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009
Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 12/2009

Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)
Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)

01/2010
01/2010

03/2010
03/2010

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia

04/2010
04/2010

06/2012
06/2012

Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 06/2013
Ukončenie projektu | 07/2013 | 12/2013

Predloženie PZ VP: 8.12.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009

11. Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia

Žiadateľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Zvýšenie kapacity prívodného potrubia surovej vody, zvýšenie kapacity úpravne vody Stakčín, zvýšenie kapacity diaľkovodu.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 52 170
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 785 282 dotknutí obyvatelia

Miesto realizácie projektu
VÚC Prešovský kraj
okres Snina, Humenné, Vranov nad Topľou
obec Starina n/Cirochou, Stakčín, Snina, Belá n/Cirochou, Dlhé n/Cirochou, Modrá n/Cirochou, Kamenica n/Cirochou, Hažín n/Cirochou, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Myslina, Topoľovka, Hudcovce, Tovarnianska Polianka, Tovarné, Sedloská, Majerovce, Vranov n/T

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Začatie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2005 | 07/2006
Analýza nákladov a výnosov | 05/2005 | 10/2005
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 05/2005 | 01/2006
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2005 | 05/2007
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 05/2005 | 06/2006
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 03/2006 | 09/2006
Formulár žiadosti | 02/2006 | 02/2009
Príprava súťažných podkladov | 03/2009 | 05/2009
Výber zhotoviteľa | 07/2009 | 09/2009
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2010 | 12/2012
Skúšobná prevádzka | 01/2013 | 12/2013
Ukončenie projektu | 01/2010 | 12/2013

Predloženie PZ VP :30.9.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009
Predloženie ŠU: 29.6.2009
Zaslanie žiadosti o zapracovanie pripomienok do návrhu ŠU:  18.11.2009 

12. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

Žiadateľ 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v aglomeráciách Veľká Ida, Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč - okr. Košice, Jasov, Moldava nad Bodvou, Košice - Šaca, ČOV Moldava nad Bodvou, ČOV Šaca.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 78 601
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 74 519
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 7 053
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 12 313
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 25 871

Miesto realizácie projektu
VÚC Košický kraj
okres Košice - okolie
obec Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou, Poproč, Medzev, Jasov, Veľká Ida, Mokrance, Janík, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Nižný Klatov, Vyšný Klatov, Paňovce, Čečejovce - časť Seleška, Buzica, Rešica, Komárovce, Cestice, Nižný Lánec, Perín - Chým

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 11/2008 | 05/2009
Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 05/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 04/2007 | 04/2009
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 11/2008 | 12/2008
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 12/2007
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2008 | 12/2008
Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009
Príprava súťažných podkladov | 01/2010 | 06/2010
Výber zhotoviteľa | 06/2010 | 09/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 09/2010 | 12/2014
Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015
Ukončenie projektu | 09/2010 | 12/2015

Predloženie PZ VP: 6.11.2008
Schválenie PZ VP: 15.4.2009
Predloženie ŠU: 3.7.2009
Zaslanie žiadosti o zapracovanie pripomienok do návrhu ŠU: 2.12.2009 
13. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec

Žiadateľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	
Ciele projektu
Zásobovanie vodou (Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Nový Salaš, Rákoš, Košice - Juh - Mongolská a Skalná ulica, Košice - Sever - Chrastie a Kostolianska ulica, Košice - Pereš a IBV Vyšný Lorinčík) a  Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v  2 aglomeráciách (Košice, Čaňa).
Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 91 549
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 24 486
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 11 167
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 303
Miesto realizácie projektu
VÚC Košický kraj
okres Košice – okolie, Košice 4, Košice 2, Košice 1
obec Košice - Sever, Juh, Barca, Pereš, Furča, Lorinčík, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Slančík, Rákoš, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 06/2009
Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 06/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2008 | 06/2008
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 10/2008 | 01/2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 12/2006 | 12/2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 06/2008 | 02/2009
Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009
Príprava súťažných podkladov | 02/2010 | 07/2010
Výber zhotoviteľa | 07/2010 | 10/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 10/2010 | 12/2014
Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015
Ukončenie projektu | | 12/2015
Predloženie PZ VP: 24.11.2008
Schválenie PZ VP: 15.4.2009
Predloženie ŠU: 6.7.2009
Zaslanie žiadosti o zapracovanie pripomienok do návrhu ŠU: 3.12.2009

14. Projekt ČOV - sever

Žiadateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Odkanalizovanie aglomerácií Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, čistenie odpadových vôd - dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia ČOV Topoľčany, ČOV.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 129 862
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 3
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 13 908
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 137 417

Miesto realizácie projektu
VÚC Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
okres Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou
obec Topoľčany, Jacovce, Tovarníky, Nitrianska Sreda, Čeľadince, Kovarce, Solčany, Bošany, Práznovce, Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Uherce, Veľké Uherce, Kolačno, Bánovce n/Bebravou, Horné Naštice

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 2008 | 2009
Analýza nákladov a výnosov | 2008 | 2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 2006 | 2007
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 2008 | 2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2006 | 2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 2009 | 2010
Formulár žiadosti | 2008 | 2009
Príprava súťažných podkladov | 2009 | 2009

Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)
Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)

2009
2010

2009
2010

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia

2009
2010

2011
2012

Skúšobná prevádzka | 2011 | 2012
Ukončenie projektu | | 2013

Predloženie PZ VP: 7.10.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009 
Predloženie ŠU: 16.10.2009
Zaslanie zápisu z prezentácie návrhu ŠU: 17.12.2009  

15. Projekt ČOV – stred

Žiadateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
Odkanalizovanie aglomerácií Zlaté Moravce, Dolná Streda (Sereď), Tlmače                                                                Čistenie odpadových vôd - dobudovanie a intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce, ČOV Dolná Streda, ČOV Tlmače.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 57 198
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 2
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 368
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 7 032/ 58 594

Miesto realizácie projektu
VÚC Nitriansky kraj, Trnavský kraj
okres Galanta, Zlaté Moravce, Levice
obec Žitavany, Zlaté Moravce, Martin nad Žitavou, Horný Čepeľ, Dolná Streda, Sereď, Tlmače, Rybník, Topoľčianky, Martin nad Žitavou

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 01/2008 | 04/2008
Analýza nákladov a výnosov | 05/2008 | 02/2009
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2006 | 05/2007
Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2008 | 04/2009
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 02/2009
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 04/2009 | 09/2009
Formulár žiadosti | 12/2008 | 04/2009
Príprava súťažných podkladov | 04/2009 | 05/2009

Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)
Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)

05/2009
02/2010

05/2009
03/2010

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia

04/2009
01/2010

12/2011
11/2012

Skúšobná prevádzka | 12/2012 | 02/2013
Ukončenie projektu | | 12/2013

Predloženie PZVP: 19.12.2008
Schválenie PZVP: 15.4.2009
Predloženie ŠU: 2.12.2009
Odoslanie žiadosti odborným útvarom a JASPERS: 3.12.2009

16. SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Žiadateľ
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	
Ciele projektu
Odvádzanie odpadových vôd (Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače) a čistenie odpadových vôd na ČOV Liptovská Teplá.
Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 39 134
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 407
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 8 149
Miesto realizácie projektu
VÚC Žilinský kraj
okres Ružomberok
obec Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Stavebný zámer | 04/2005 | 07/2005
Analýza nákladov a výnosov | 07/2008 | 09/2008
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 04/2005 | 07/2005
Dokumentácia pre územné rozhodnutie | 05/2005 | 08/2005
Dokumentácia pre stavebné povolenie | 07/2005 | 10/2005
Realizačná projektová dokumentácia | 11/2008 | 02/2009
Príprava súťažných podkladov | 11/2008 | 12/2008
Štúdia uskutočniteľnosti | 04/2009 | 09/2009
Žiadosť z fondov EÚ | 12/2009 | 06/2009
Výber zhotoviteľa | 04/2009 | 10/2009

Realizácia predmetu zmluvy o dielo 
(vrátane stavebného dozoru)

11/2009

11/2011

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby | 11/2011 | 01/2012
Vypracovanie prevádzkových poriadkov | 11/2012 | 01/2013
Skúšobná prevádzka | 11/2012 | 12/2013
Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu | 12/2013 | 02/2014
Prevádzka | 02/2014 | -

Predloženie PZ VP: 16.12.2008
Schválenie PZ VP: 18.3.2009
Predloženie ŠU: 30.6.2009
Schválenie ŠU: 7.9.2009
Predloženie ŽoPP: 7.12.2009